내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2012. 12. 20. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	100	-	100 100	·잔여부위 마무리 공사	계룡 건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	94.1	3.5	97.6 97.6	·내외부 인테리어 작업	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	58.2	1.8	60.0 60.0	·숙영동 조적쌓기 작업	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	93.2	0.7	93.9 91.1	·대2-5 우수관 설치	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.10	82.0	1.4	83.4 83.4	·대1-1 재이용수 관부설	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	65.1	0.4	65.5 65.2	·대1-1 보도부 토공정리	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	467	’11. 8 ~ ’14. 7	54.0	0.9	54.9 46.0	·도청대로 보도블럭 설치 ·이주단지, 상업용지 경계석 설치	코오롱 건설
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	31.1	0.3	31.4 24.8	·토공사 및 관로공사	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 4	87.5	0.2	87.7 86.3	·스포츠 타워 조립	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13.10	45.4	0.4	45.8 45.5	·대3-9,4 이송관로 관부설 및 되메우기	포스코 건설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	16	’10.12 ~ ’13.01	95.9	-	95.9 -	·공사중지	구일종합건설
조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	20.2	0.5	20.7 21.5	·근린공원 3,4 자재 및 현장정리	승화 건설
전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	21.6	1.2	22.8 22.7	·관사 진입로 보안등 배선작업	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	8.68	0.01	8.69 8.69	·도청,교육청,롯데아파트 열공급	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12. 12	97.1	0.4	97.5 97.5	·1공구 옹벽 Con'c 양생 ·2공구 교통섬 설치	한화 동우
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,117	’11. 7 ~ ’14. 6	48.2	0.2	48.4 48.4	·송석교 PC빔 제작 ·산수과선교 하부 되메우기	동성 건설
내포 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	73.1	6.9	80.0 79.8	·내부 인테리어 작업	세광 건설
내포 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	73.2	0.3	73.5 74.0	·내부 창호작업 ·바닥 인조대리석 작업	케이앤 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	15.7	-	15.7 -	·공사재개(12.18) ·지하층 레미콘 타설	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	7.5	1.0	8.5 8.5	·지하층(주차장) 공사	진흥 기업