내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2012. 12. 27. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	100	-	100 100	·준공	계룡 건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	97.6	2.0	99.6 99.6	·내부 인테리어 작업	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	60.0	2.0	62.0 62.0	·외부 판넬 붙임 작업	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	93.9	1.1	95.0 93.8	·현장 청소 및 정리정돈	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.10	83.4	2.6	86.0 85.1	·대1-1 재이용수 맨홀설치	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	65.5	0.6	66.1 65.8	·대3-6 기층 포장	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	467	’11. 8 ~ ’14. 7	54.9	0.8	55.7 46.9	·이주단지, 상업용지 경계석 설치	코오롱 건설
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	31.4	0.3	31.7 25.1	·토공사 및 관로공사	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 4	93.5	1.5	95.0 94.5	·슬러지 반출시설 시스템 동바리 설치	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13.10	45.8	0.9	46.7 46.3	·대3-3,9 이송관로 되메우기	포스코 건설
1,3구역 조경공사	․면적 89천㎡	81	’12.10 ~ ’15.10	6.0	-	6.0 6.0	·동절기 공사중지 ·현장정리, 동절기 수목관리	유진건설 원광건설
1,3구역 전기공사	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	24	’12.9 ~ ’13.9	50.0	3.0	53.0 53.0	·도청대로 가로등 점등실시 ·이주단지 가로등 배관공사	금평 전설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	16	’10.12 ~ ’13.01	95.9	-	95.9 -	·공사중지	구일종합건설
2구역 조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	20.7	-	20.7 21.5	·안전 시설물 점검 및 현장 정리	승화 건설
2구역 전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	22.8	1.3	24.1 24.0	·대2-7 가로등 배선작업	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	12.9	0.1	13.0 13.0	·도청,교육청,롯데아파트 열공급	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12. 12	97.5	0.2	97.7 97.7	·1공구 옹벽 Con'c양생 ·2공구 교량부 연석 설치	한화 동우
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,117	’11. 7 ~ ’14. 6	58.5	1.5	60.0 59.7	·통로암거 뒷채움 ·순성토 반입 및 다짐	동성 건설
내포 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	80.0	6.0	86.0 86.0	·내부 천장 작업 ·외부 비계해체 작업	세광 건설
내포 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	73.5	13.7	87.2 86.0	·외벽 복합판넬 붙임 작업 ·구령대 설치 작업	케이앤 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	15.7	-	15.7 -	·지하층 공사	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	8.5	1.5	10.0 9.9	·지하층(주차장) 공사	진흥 기업