내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2013. 1. 10. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	100	-	100 100	·준공계 접수(12/30)	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	62.3	0.1	62.4 62.4	·소방 배관 공사	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	95.0	0.1	95.1 92.8	·현장 청소 및 정리정돈	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.10	84.7	0.5	85.2 85.2	·신경천 저수호안 깬돌 보수	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	66.5	0.6	67.1 66.7	·함양지 호안 자연석 쌓기	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	510	’11. 8 ~ ’14. 7	55.7	0.3	56.0 47.7%	·목리천 호안블럭 쌓기 ·이주단지 우수연결관설치	코오롱 글로벌
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	31.8	0.1	31.9 26.1	·단독필지 절,성토 ·하천유지용수관로 터파기	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13.10	87.9	0.3	88.2 86.8	·분리막조 에폭시방수	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13.10	47.3	0.5	47.8 48.5	·제1집하장 마감작업	포스코 건설
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡	78	’12.10 ~ ’13.10	20.0	-	20.0 20.0	·동절기 공사중지 ·현장정리, 동절기 수목관리	유진건설 원광건설
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	24	’12.9 ~ ’13.9	53.0	-	53.0 60.0	·동절기 공사중지 ·현장정리 및 관리	금평 전설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	16	’10.12 ~ ’13.01	95.9	-	95.9 -	·공사중지	구일종합건설
2구역 조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	20.7	0.1	20.8 21.5	·비옥토 운반	승화 건설
2구역 전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	24.6	1.5	26.1 26	·가로등 수평작업	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	13.0	-	13.0 13.0	·도청, 교육청, 롯데아파트 열공급	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12. 12	97.7	-	97.7 97.7	·공사중지	한화 동우
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,133	’11. 7 ~ ’14. 6	60.0	0.1	60.1 60.1	·공사현장 제설작업 ·토공사(흙깍기및정리)	동성 건설
내포 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	88.0	0.5	88.5 88.0	·유리취부작업	세광 건설
내포 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	87.3	0.2	87.5 87.0	·유리취부작업	케이앤 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	15.7	0.1	15.8 15.7	·지하층 작업	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	10.5	1.0	11.5 11.0	·지하층 작업	진흥 기업