내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2013. 1. 24. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	100	-	100 100	·준공	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	63.3	0.9	64.2 64.2	·본관 유리 취부 작업 ·외부 창호 설치 작업	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	95.1	-	95.1 94.9	·현장 청소 및 정리정돈	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.10	85.8	0.3	86.1 86.2	·현장정리 및 야적장 정리 ·야적장 내 철근조립 작업	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	67.4	0.3	67.7 67.3	·토사운반 및 부지정리 ·대로2-1 상수관로 부설	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	510	’11. 8 ~ ’14. 7	56.3	0.7	57.0 47.9	·목리천, 수암천 돌쌓기 ·대로(2-8,2-11,3-11) 우수 및 오수관로 시공	코오롱 글로벌
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	32.3	0.2	32.5 26.8	·단독필지 절,성토 ·수로암거4 뒷채움 및 되메우기	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13.10	88.3	0.1	88.4 87.1	·관리동 외부천정 작업 ·전기실 단말 작업	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13.10	47.8	0.1	47.9 48.9	·1집하장 외부 단열재 시공 ·2집하장 지하1층 철근 설치	포스코 건설
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡	78	’12.10 ~ ’13.10	20.0	-	20.0 20.0	·동절기 공사중지 ·현장정리, 동절기 수목관리	유진 건설
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	24	’12.9 ~ ’13.9	53.0	-	53.0 60.0	·동절기 공사중지 ·현장정리 및 관리	금평 전설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	16	’10.12 ~ ’13.01	95.9	-	95.9 95.9	·공사중지	구일종합건설
2구역 조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	20.9	-	20.9 21.6	·현장 청소 및 정리정돈	승화 건설
2구역 전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	26.5	1.0	27.5 27.5	·대3-6 가로등 기초설치	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	13.0	-	13.0 13.0	·임시보일러 운영	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12.12	97.7	-	97.7 97.7	·공사중지	한화 동우
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,133	’11. 7 ~ ’14. 6	60.2	0.1	60.3 60.3	·토사측구, 배수로 정비 ·진입로 및 법면정리	동성 건설
내 포 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	92.0	2.0	94.0 94.0	·외부 부대토목 작업	세광 건설
내 포 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	87.5	2.0	89.5 89.5	·외부 부대토목 작업	케이앤 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	15.9	0.1	16.0 16.0	·지하층 작업	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	13.0	0.5	13.5 13.5	·지하층 작업	진흥 기업