내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2013. 2. 14. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	65.4	0.9	66.3 66.3	·본관 외부 저층부 석공사 ·본관 유리설치 작업	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	95.1	-	95.1 94.9	·현장정리 및 관리	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.10	87.0	-	87.0 87.1	·대로2-10 제수변실 터파기	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	68.5	0.4	68.9 68.6	·함양지 호안 자연석 쌓기 ·소로1-7 토공 및 관로부설	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	510	’11. 8 ~ ’14. 7	57.4	0.2	57.6 48.4	·대로(2-11,3-11)우․오수관로 부설 및 되메우기	코오롱 글로벌
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	33.4	0.2	33.6 28.4	·A24, A26블럭 절․성토 및 토사 반출	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13.10	88.7	0.3	89.0 88.0	·슬러지반출시설 상부 슬래브 철근조립	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13.10	48.1	0.1	48.2 49.8	·1집하장 지하2층 폐기물 이송배관 설치	포스코 건설
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡	78	’12.10 ~ ’13.10	20.0	-	20.0 20.0	·동절기 공사중지 ·현장정리, 동절기 수목관리	유진건설 원광건설
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	24	’12.9 ~ ’13.9	53.0	-	53.0 60.0	·동절기 공사중지 ·현장정리 및 관리	금평 전설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	16	’10.12 ~ ’13.01	95.9	-	95.9 95.9	·공사중지	구일종합건설
2구역 조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	21.0	-	21.0 21.6	·완충녹지 8호 비옥토운반	승화 건설
2구역 전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	29.0	1.1	30.1 30.1	·중로1-9 가로등 수평작업	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	13.0	-	13.0 13.0	·도청, 교육청, 롯데아파트 열공급	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12.12	97.7	-	97.7 97.7	·공사중지	한화 동우
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,133	’11. 7 ~ ’14. 6	60.5	0.1	60.6 60.6	·송석교 교각 철근조립 ·토공사(흙깍기, 흙운반)	동성 건설
내 포 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	96.0	0.5	96.5 96.5	·내부 마무리 작업	세광 건설
내 포 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	96.5	0.5	97.0 97.0	·내부 마무리 작업	케이앤 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	16.4	-	16.4 16.4	·지하층 작업	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	14.8	-	14.8 14.8	·지하층 작업	진흥 기업
충공임대빌딩 신 축 사 업	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층	147	’12.11 ~ ’14.01	22.0	1.0	23.0 23.0	·지하층 기초골조작업	명승건설산업