내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2013. 3. 7. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	66.8	1.5	68.3 68.1	·본관 외부창호 작업 ·본관 배관공사	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	95.1	0.3	95.4 95.4	·현장정리정돈 작업	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.10	88.3	0.9	89.2 89.2	·대로2-10 경계석 및 L형 측구 설치 ·대로2-7 보도블럭 설치	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	69.6	1.4	71.0 69.3	·대로1-1 보도부 토공정리	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	510	’11. 8 ~ ’14. 7	59.6	0.9	60.5 50.7	·도청대로 보도부 경계석 설치	코오롱 글로벌
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	34.3	0.5	34.8 31.3	·A24, A26블럭 절․성토 및 토사 반출	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13.10	89.5	0.4	89.9 89.3	·방수작업 ·야외무대 기초작업	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13.10	48.4	0.1	48.5 50.9	·1집하장 폐기물배관 설치 ·2집하장 지상1층 거푸집작업	포스코 건설
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡	78	’12.10 ~ ’13.10	20.0	-	20.0 20.0	·애향공원 시설물 터파기 준비 및 기초콘크리트 타설 준비	유진건설 원광건설
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	24	’12.9 ~ ’13.9	53.0	-	53.0 60.0	·이주자택지 기초배관준비	금평 전설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	16	’10.12 ~ ’13.01	95.9	-	95.9 95.9	·공사중지	구일종합건설
2구역 조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	21.3	0.1	21.4 21.6	·근린공원 3,4호 잔디식재 ·근린공원 4호 우수관 작업	승화 건설
2구역 전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	31.0	0.6	31.6 31.6	·중로1-12 안정기/차단기 설치	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	13.0	-	13.0 13.0	·도청, 교육청, 롯데아파트 열공급	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12.12	97.7	-	97.7 97.7	·공사중지	한화 동우
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,133	’11. 7 ~ ’14. 6	60.8	0.1	60.9 60.9	·산수과선교 철근조립 ·응봉교 슬라브 CON’c타설	동성 건설
내 포 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	99.7	0.3	100 100	·준공	세광 건설
내 포 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	99.7	0.3	100 100	·준공	케이앤 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	19.9	0.8	20.7 20.7	·지하층 및 1층 셋팅 작업	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	16.1	-	16.1 16.1	·지하층 및 1층 셋팅 작업	진흥 기업
충공임대빌딩 신 축 사 업	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층	147	’12.11 ~ ’14.01	24.0	1.0	25.0 25.0	·지하층 기초골조작업	명승건설산업