내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2013. 3. 21. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	69.1	1.5	70.6 70.0	·보강토 옹벽 콘크리트 타설 ·본관 천정 택스설치 작업	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	95.9	0.5	96.4 96.4	·대로1-2, 이주단지 보도블럭 시공	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.10	89.7	0.3	90.0 90.0	·신경2교 상부조형물 설치 ·대로2-10 중분대 경계석설치	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	72.3	1.4	73.7 73.5	·대로1-1 보도경계석 및 보도블록 설치	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	510	’11. 8 ~ ’14. 7	61.8	1.5	63.3 53.1	·이주단지 골재포설, 경계석 설치	코오롱 글로벌
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	35.2	0.9	36.1 33.7	·단독필지 절취 및 성토	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13.10	90.3	0.7	91.0 90.7	·MBR(분리막)설치 작업	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13.10	48.9	0.7	49.6 52.0	·2집하장 지하1층 되메우기	포스코 건설
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡	78	’12.10 ~ ’13.10	20.1	0.1	20.2 20.0	·애향공원 시설물 터파기 준비 및 기초콘크리트 타설 준비	유진건설 원광건설
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	24	’12.9 ~ ’13.9	54.5	0.7	55.2 60.0	·이주자택지 기초배관설치	금평 전설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	16	’10.12 ~ ’13.01	95.9	-	95.9 95.9	·공사중지	구일종합건설
2구역 조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	21.4	0.1	21.5 21.7	·소공원 점토블럭 포장 ·완충녹지2-4 식재작업	승화 건설
2구역 전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	32.1	0.6	32.7 32.7	·대로2-8 신호제어기 설치 ·대로2-8 제어반 전원작업	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	13.0	-	13.0 13.0	·도청, 교육청, 롯데아파트 열공급	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12.12	97.7	0.2	97.9 97.9	·토공부 법면정리 시행 ·보도및자전거도로 시행	한화 동우
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,133	’11. 7 ~ ’14. 6	61.0	0.1	61.1 61.1	·응봉교 슬라브거푸집 보강 ·암거공 되메우기	동성 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	22.0	2.0	24.0 24.0	·지하∼2층 골조작업	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	16.2	1.8	18.0 18.0	·지하∼4층 골조작업	진흥 기업
충공임대빌딩 신 축 사 업	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층	147	’12.11 ~ ’14.01	28.0	3.0	31.0 31.0	·지하층 기초골조작업	명승건설산업