내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2013. 4. 4. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	70.6	-	70.6 70.6	·조경석쌓기 실시 ·본관동 케노피 설치	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	96.6	0.2	96.8 96.8	·청사주변 차선도색 ·대로2-5 노상작업	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.10	90.2	0.2	90.4 90.4	·대로2-4 우수관로 관부설 ·대로2-10 보도블럭 설치	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	75.0	1.4	76.4 76.1	·신리천 수목식재	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	510	’11. 8 ~ ’14. 7	63.9	0.6	63.9 53.4	·이주단지 골재포설, 경계석 설치	코오롱 글로벌
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	37.2	0.2	37.4 37.1	·단독필지 절취 및 성토	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13.10	91.3	0.4	91.7 91.7	·생태연못 정지, 분수대작업 ·반출실 램프 버림타설	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13.10	50.5	0.6	51.1 52.6	·1집하장 외부 판넬설치 ·2집하장 거푸집/철근작업	포스코 건설
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡	78	’12.10 ~ ’13.10	20.3	0.1	20.4 20.3	·애향공원 시설물 설치	유진건설 원광건설
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	24	’12.9 ~ ’13.9	55.8	1.9	57.7 60.0	·이주자택지 기초배관설치	금평 전설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	16	’10.12 ~ ’13.01	95.9	-	95.9 95.9	·공사중지	구일종합건설
2구역 조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	21.6	0.5	22.1 22.4	·광장12호 거푸집해체 및 구체 거푸집조립	승화 건설
2구역 전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	33.3	0.5	33.8 33.6	·대로2-5 신호등횡단배관 ·신경천주변 보안등작업	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	13.0	0.1	13.1 13.1	·도청, 교육청, 롯데아파트 열공급	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12.12	98.1	0.2	98.3 98.3	·자전거도로 도색 및 부대공	한화 동우
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,133	’11. 7 ~ ’14. 6	61.2	0.1	61.3 61.3	·토공사(흙깍기, 흙쌓기) ·송석교 하부공 시행	동성 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	26.0	2.0	28.0 28.0	·지하층~3층 작업	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	18.8	2.2	21.0 21.0	·지하층~6층 작업	진흥 기업
충공임대빌딩 신 축 사 업	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층	147	’12.11 ~ ’14.01	32.0	1.0	33.0 33.0	·지상1층 골조작업	명승건설산업