내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2013. 4. 11. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	70.6	0.9	71.5 71.0	·보강토 옹벽블록 설치 ·사격장 내부 작업	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	96.8	0.6	97.4 97.4	·대로2-5 노상작업 ·대로2-5 지상식 소화전 설치	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.10	90.4	0.4	90.8 90.8	·대로2-10 경계석설치 및 이토변실 슬래브작업	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	76.4	1.0	77.4 77.2	·대로2-1, 2-7 동상방지층 포설 및 다짐	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	510	’11. 8 ~ ’14. 7	63.9	0.9	64.8 55.9	·이주단지 골재포설, 경계석 설치	코오롱 글로벌
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	37.4	1.1	38.5 38.5	·단독필지 절취 및 성토	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13.10	91.7	1.0	92.7 92.7	·어린이놀이터 토공작업 ·목재데크 설치 작업	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13.10	51.1	0.6	51.7 53.3	·1집하장 외부 판넬작업 ·2집하장 거푸집/철근작업	포스코 건설
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡	78	’12.10 ~ ’13.10	20.4	1.1	21.5 21.3	·애향공원 시설물 설치	유진건설 원광건설
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	24	’12.9 ~ ’13.9	57.7	2.1	59.8 60.4	·이주자택지 기초배관설치	금평 전설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	16	’10.12 ~ ’13.06	95.9	-	95.9 95.9	·동절기 공사중지 해제	구일종합건설
2구역 조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	22.1	0.9	23.0 23.4	·완충 1-3, 2-2호 연결녹지 7-3호 수목식재	승화 건설
2구역 전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	33.8	0.4	34.2 34.1	·신경천 자전거도로 구간 배관작업	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	13.1	-	13.1 13.1	·중심상업구역 열배관 공사 ·대2-10 송수전 선로공사	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12.12	98.3	1.7	100 100	·공사완료	한화 동우
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,133	’11. 7 ~ ’14. 6	61.3	0.1	61.4 61.4	·토공사(흙깍기, 흙쌓기) ·송석교 하부공 시행	동성 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	28.0	1.0	29.0 29.0	·지하층∼3층 작업	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	21.0	1.0	22.0 22.0	·지하층∼6층 작업	진흥 기업
RH-7BL(LH) APT건립공사	․연면적 312천㎡ ․2,127세대	3,224	`12.12 ~ `15.06	5.7	0.3	6.0 3.1	·기초골조작업	서희 건설
충공임대빌딩 신 축 사 업	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층	147	’12.11 ~ ’14.01	33.0	1.0	34.0 34.0	·지상1층 골조공사	명승건설산업