내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2013. 5. 2. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	74.6	1.8	76.4 75.1	·본관동 외부창호 및 유리시공 ·보강토옹벽 블록 설치	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	98.3	0.2	98.5 98.5	·대로 1-2 상수관로 이설작업 ·대로 2-5 우수받이 설치	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.10	91.2	0.1	91.3 91.6	·중로3-2 보조기층 포설 ·신경천 저수호안 보완	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	79.5	0.6	80.1 79.9	·대로2-1 보조기층 포설 ·영구저류지 호안 토공정리	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	510	’11. 8 ~ ’14. 7	66.5	0.3	66.8 59.4	·이주단지 골재포설, 경계석 설치	코오롱 글로벌
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	41.9	0.2	42.1 41.1	·대로 2-10, 2-4호선 우수관공	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13.10	94.7	0.9	95.6 95.6	·슬러지반출시설 진입램프 벽체거푸집 설치	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13.10	68.2	0.1	68.3 68.1	·1집하장 외부 창호 및 유리시공 ·2집하장 기계설비 설치	포스코 건설
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡	78	’12.10 ~ ’13.10	23.6	2.4	26.0 25.4	·애향공원 시설물 설치 ·식재공사	유진건설 원광건설
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	24	’12.9 ~ ’13.9	61.4	1.8	63.2 62.8	·가로등 및 신호등 기초 배관포설	금평 전설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	16	’10.12 ~ ’13.06	95.9	-	95.9 95.9	·현장정리	구일종합건설
2구역 조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	24.9	0.7	25.6 26.2	·어린이공원 14,15호 플랜터 석재마감 작업	승화 건설
2구역 전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	35.3	0.4	35.7 35.6	·대로2-1 가로등배관 및 기초 설치	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	13.1	0.1	13.2 13.2	·대2-10 맨홀설치 ·대3-5 열배관 공사	롯데 건설
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,133	’11. 7 ~ ’14. 6	61.6	0.1	61.7 61.7	·송석교 하부공 및 토공사 시행	동성 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	31.6	1.5	33.1 33.1	·1층∼5층 작업	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	25.4	1.4	26.8 26.8	·지하층∼9층 작업	진흥 기업
RH-7BL(LH) APT건립공사	․연면적 312천㎡ ․2,127세대	3,224	`12.12 ~ `15.06	3.9	1.4	5.3 8.3	·기초골조작업	서희 건설
충공임대빌딩 신 축 사 업	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층	147	’12.11 ~ ’14.01	37.0	1.0	38.0 38.0	·1층 골조작업	명승건설산업