내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2013. 5. 30. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	81.2	2.0	83.2 81.9	·내부 인테리어 마감공사 ·조경수 반입 및 식재	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	98.6	0	98.6 98.6	·대로1-1 확폭구간 골재포설 ·대로2-5 중분대 골재 포설	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.10	91.6	0.1	91.7 92.0	·대로 2-4 골재포설 및 다짐 ·신경천, 상아천 산책로 포장	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	82.8	0.9	83.7 83.5	·대로2-7 보차도 경계석 설치 ·대로3-5 우수관로 부설	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	510	’11. 8 ~ ’14. 7	68.8	0.9	69.7 62.9	·이주단지 골재포설, 경계석 설치	코오롱 글로벌
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	47.0	1.1	48.1 47.1	·대로 2-10, 2-4호선 우수관공	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13.10	97.2	0.3	97.5 97.5	·반출실 방수공사 및 진입도로 토공사	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13.10	72.1	2.5	74.6 72.1	·1집하장 외부 창호 및 유리시공 ·2집하장 기계설비 설치	포스코 건설
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡	78	’12.10 ~ ’13.10	29.9	2.5	32.4 29.4	·애향공원 시설물 설치 ·식재공사	유진건설 원광건설
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	24	’12.9 ~ ’13.9	68.3	1.6	69.9 66.9	·가로등 및 신호등 기초 배관포설	금평 전설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	16	’10.12 ~ ’13.06	95.9	-	95.9 95.9	·현장정리	구일종합건설
2구역 조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	31.0	0.5	31.5 32.9	·완충녹지 1,2,8호 수목 식재 ·근린공원5,7호 시설물공사	승화 건설
2구역 전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	38.3	0.3	38.6 38.5	·대로2-5 가로등배관 및 기초 설치	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	13.2	-	13.2 13.2	·열배관 공사	롯데 건설
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,133	’11. 7 ~ ’14. 6	62.0	0.1	62.1 62.1	·산수과선교 상부공, 송석교 하부공 및 토공사 시행	동성 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	34.7	0.5	35.2 35.2	·1층∼8층 작업	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	28.7	0.4	29.1 29.1	·지하층∼10층 작업	진흥 기업
RH-7BL(LH) APT건립공사	․연면적 312천㎡ ․2,127세대	3,224	`12.12 ~ `15.06	7.1	1.1	8.2 11.2	·기초골조작업	서희 건설
충공임대빌딩 신 축 사 업	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층	147	’12.11 ~ ’14.01	40.2	0.8	41.0 41.0	·4층 바닥슬래브 거푸집 조립	명승건설산업