내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2013. 7. 25. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	93.6	1.1	94.7 96.4	·내부 인테리어 마감공사 ·경계석 및 L형측구 설치	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 9	98.8	0.1	98.9 98.9	·대로1-2 2-11 아스콘 포장 ·이주자택지 험프식보도 설치	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.10	92.4	0.2	92.6 92.9	·대로 2-4 아스콘 포장 ·신경 1·2교 신축이음 설치	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	90.2	0.9	91.1 90.9	·대로2-7, 보도부 경계석 시공 ·관사부지 진입로 조경석 보수	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	510	’11. 8 ~ ’14. 7	76.2	0.6	76.8 68.9	·대로2-2노상포설 및 다짐 ·대로2-11보도부 골재포설	코오롱 글로벌
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	55.1	1.1	56.2 54.9	·대로2-4 경계석시공 ·중로1-2 우수관부설	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13.10	99.1	0.1	99.2 99.2	·반출실 진입램프 공사 ·종합시운전 시행(4.9～10.8)	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13.10	83.9	0.6	84.5 83.0	·1집하장 외부 창호 및 내부도장 ·2집하장 내부 기계설비공사	포스코 건설
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡	78	’12.10 ~ ’13.10	68.2	1.1	69.3 69.0	·애향공원 시설물 설치 ·식재공사	유진건설 원광건설
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	24	’12.9 ~ ’13.9	76.1	0.8	76.9 75.3	·가로등 및 신호등 기초 배관포설	금평 전설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	35	’10.12 ~ ’13.12	96.5	0.1	96.6 96.6	·목리천 ICP말뚝 근입작업 ·교량구간 호안정리	성보 건설
2구역 조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	41.6	0.1	41.7 43.8	·광장14, 16호 장식벽 설치 ·근린공원7호 점토블럭 포장	승화 건설
2구역 전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	49.0	0.8	49.8 49.8	·대로2-1 가로등 기초설치 및 배관작업	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	13.2	-	13.2 13.2	·열배관 공사	롯데 건설
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,424	’11. 7 ~ ’15. 6	62.8	0.1	62.9 62.9	·홍북터널(중앙터널)굴착, 송석교 하부공	동성 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	45.1	1.2	46.3 46.3	·4층∼15층 작업	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	40.3	1.5	41.8 41.8	·3층∼16층 작업	진흥 기업
RH-7BL(LH) APT건립공사	․연면적 312천㎡ ․2,127세대	3,224	`12.12 ~ `15.06	13.1	1.0	14.1 16.7	·기초골조작업	서희 건설
충공임대빌딩 신 축 사 업	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층	147	’12.11 ~ ’14.01	44.9	1.5	46.4 46.4	·7층 벽체 철근 및 거푸집 조립	명승건설산업