내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2013. 8. 8. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	95.7	0.8	96.5 98.2	·내부 인테리어 마감공사 ·경계석 및 L형측구 설치	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 9	98.9	0.1	99.0 99.0	·대로2-11 보도경계석 설치 ·이주자택지 험프식보도 설치	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.10	92.8	0.1	92.9 94.2	·신경천 산책로 경계석 설치 ·대로2-4, 2-10 아스콘 포장	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	92.1	0.2	92.3 92.1	·대로2-1, 중로1-6 아스콘 포장 ·신리천 산책로 골재포설	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	510	’11. 8 ~ ’14. 7	77.2	0.7	77.9 70.2	·대로2-2노상포설 및 다짐 ·대로2-11보도부 골재포설	코오롱 글로벌
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	56.7	0.6	57.3 55.5	·대로2-4 경계석시공 ·중로1-2 우수관부설	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13.10	99.3	0.1	99.4 99.4	·진입도로 경계석 설치 ·종합시운전 시행(4.9～10.8)	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13.10	85.9	1.2	87.1 86.2	·1집하장 조경시설물 설치 ·2집하장 내부 기계설비공사	포스코 건설
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡	78	’12.10 ~ ’13.10	69.8	0.9	70.7 70.1	·애향공원 시설물 설치 ·식재공사	유진건설 원광건설
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	24	’12.9 ~ ’13.9	77.8	0.6	78.4 77.0	·가로등 및 신호등 기초 배관포설	금평 전설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	35	’10.12 ~ ’13.12	96.7	0.1	96.8 96.8	·목리천 ICP말뚝 두부정리 ·신경천 교량 기초 버림 타설	성보 건설
2구역 조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	41.9	0.3	42.2 44.1	·광장15호 스탠드 설치 ·광장18호 앉음벽 설치	승화 건설
2구역 전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	50.5	0.8	51.3 51.3	·중로1-6 가로등 기초설치 및 배관작업	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	13.2	-	13.2 13.2	·열배관 공사	롯데 건설
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,424	’11. 7 ~ ’15. 6	63.0	0.1	63.1 63.1	·홍북터널(중앙터널)굴착, 송석교 하부공	동성 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	47.8	0.5	48.3 48.3	·5층∼16층 작업	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	43.6	0.5	44.1 44.1	·4층∼17층 작업	진흥 기업
RH-7BL(LH) APT건립공사	․연면적 312천㎡ ․2,127세대	3,224	`12.12 ~ `15.06	14.9	0.7	15.6 17.2	·기초골조작업	서희 건설
충공임대빌딩 신 축 사 업	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층	147	’12.11 ~ ’14.01	49.3	3.2	52.5 52.5	·최상층 지붕 슬라브 공사	명승건설산업