내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2013. 8. 14. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	96.5	0.8	97.3 98.6	·내부 인테리어 마감공사 ·경계석 및 L형측구 설치	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 9	99.0	0	99.0 99.0	·대로2-5, 11 보도부 시공 ·이주자택지 험프식보도 설치	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.10	92.9	0.6	93.5 94.3	·신경천 산책로 경계석 설치 ·대로2-4 보도부 골재포설	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	92.3	0.2	92.5 92.3	·대로2-7, 중로2-7 보도부 시공 ·신리천 산책로 골재포설	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	510	’11. 8 ~ ’14. 7	77.9	0.1	78.0 70.4	·도로 노상 및 경계석 설치 ·단지내부 관로공사 시행	코오롱 글로벌
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	57.3	0.2	57.5 56.8	·단독필지등 우·오수부설 ·자경천 자연석 쌓기	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13.10	99.4	0	99.4 99.4	·진입도로 보조기층 포설 ·종합시운전 시행(4.9～10.8)	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13.10	87.1	1.5	88.6 88.3	·1집하장 조경시설물 설치 ·2집하장 내부 기계설비공사	포스코 건설
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡	78	’12.10 ~ ’13.10	70.7	2.1	72.8 72.0	·주재공원 인조화강석 블록 포장 ·메모리얼 가벽 석재마감	유진건설 원광건설
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	24	’12.9 ~ ’13.9	78.4	0.1	78.5 79.4	·가로등, 공원등 기초설치 ·신호등 4개소 설치	금평 전설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	35	’10.12 ~ ’13.12	96.8	0.1	96.9 96.9	·목리천 교량기초 Con'c타설 ·신경천 교량 기초철근 조립	성보 건설
2구역 조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	42.2	0.3	42.5 44.2	·광장12호 판석포장 ·광장18호 부지정지	승화 건설
2구역 전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	51.3	0.6	51.9 51.9	·대로2-5 가로등 기초설치 및 배관작업	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	13.2	-	13.2 13.2	·열배관 공사	롯데 건설
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,424	’11. 7 ~ ’15. 6	63.1	0.1	63.2 63.2	·홍북터널(중앙터널)굴착, 송석교 하부공	동성 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	48.3	0.5	48.8 48.8	·6층∼17층 작업	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	44.1	0.5	44.6 44.6	·5층∼18층 작업	진흥 기업
RH-7BL(LH) APT건립공사	․연면적 312천㎡ ․2,127세대	3,224	`12.12 ~ `15.09	15.6	0.1	15.7 17.3	·1층 바닥타설 작업	서희 건설
충공임대빌딩 신 축 사 업	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층	147	’12.11 ~ ’14.01	52.5	6.1	58.6 52.5	·옥탑골조 및 조적·미장공사 ·외부판넬 바탕철물 조립	명승건설산업