내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2013. 8. 29. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	97.5	0.1	97.6 99.7	·내부 인테리어 마감공사	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 9	99.0	0	99.0 99.0	·대로2-5, 11 아스콘 포장 ·이주자택지 험프 경계석 설치	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.10	94.4	0.3	94.7 94.7	·신경천 자전거도로 포장 ·대로2-4 보도블럭 설치	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	92.8	0.2	93.0 92.8	·중로1-6 보조기층 시공 ·대로2-7 투수블럭 시공	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	510	’11. 8 ~ ’14. 7	78.1	0.2	78.3 70.6	·도로 노상 및 경계석 설치 ·단지내부 관로공사 시행	코오롱 글로벌
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	57.8	0.4	58.2 57.9	·단독필지등 우·오수부설 ·자경천 자연석 쌓기	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13.10	99.4	0.1	99.5 99.5	·진입도로 아스콘 포장 ·종합시운전 시행(4.9～10.8)	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13.10	89.9	2.1	92.0 91.2	·1집하장 조경시설물 설치 ·2집하장 내부 기계설비공사	포스코 건설
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡	78	’12.10 ~ ’13.10	78.1	0.3	78.4 78.4	·주재공원 인조화강석 블록 포장 ·메모리얼 가벽 석재마감	유진건설 원광건설
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	24	’12.9 ~ ’13.9	78.8	0.3	79.1 79.1	·가로등, 공원등 기초설치 ·신호등 4개소 설치	금평 전설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	35	’10.12 ~ ’13.12	97.0	0.1	97.1 97.1	·목리천 교대벽체 철근 조립 ·신경천 좌안 농로 거푸집 설치	성보 건설
2구역 조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	42.9	0.4	43.3 44.3	·광장15호 스탠드 시공 ·근린5호 데크로드 시공	승화 건설
2구역 전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	52.6	0.7	53.3 53.3	·대로2-8 가로등 기초설치 및 배관작업	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	13.2	-	13.2 13.2	·열배관 공사	롯데 건설
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,424	’11. 7 ~ ’15. 6	63.3	0.1	63.4 63.4	·홍북터널(중앙터널)굴착, 송석교 하부공	동성 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	49.6	0.8	50.4 50.4	·8층∼17층 작업	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	46.8	1.8	48.6 48.6	·10층∼18층 작업	진흥 기업
RH-7BL(LH) APT건립공사	․연면적 312천㎡ ․2,127세대	3,224	`12.12 ~ `15.09	17.0	0.8	17.8 20.8	·1층 바닥타설 작업	서희 건설
충공임대빌딩 신 축 사 업	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층	147	’12.11 ~ ’14.01	60.4	2.8	63.2 63.2	·내부 조적 및 미장공사 ·외부판넬 바탕철물 조립	명승건설산업