내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2013. 9. 12. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	98.2	0.5	98.7 99.9	·내․외부 마감공사	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 9	99.2	0	99.2 99.2	·중로 1-9, 3-22 표층 포장 ·이주자택지 차선도색	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.10	94.9	0.3	95.2 95.2	·대로 2-4호선 차선도색 ·대로2-10, 중로1-7 아스콘 포장	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	93.2	0.2	93.4 93.2	·대로 2-1, 2-7 표층 포장 ·대로 3-5 보차도 경계석 설치	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	510	’11. 8 ~ ’14. 7	78.7	0.4	79.1 71.2	·도로 노상 및 경계석 설치 ·단지내부 관로공사 시행	코오롱 글로벌
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	58.4	0.8	59.2 58.7	·단독필지등 우·오수부설 ·자경천 자연석 쌓기	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13.10	99.6	0	99.6 99.6	·진입도로 보도블록 포장 ·유지관리운전 시행	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13.10	93.2	1.1	94.3 93.2	·1집하장 조경시설물 설치 ·2집하장 내부 기계설비공사	포스코 건설
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡	78	’12.10 ~ ’13.10	78.8	0.3	79.1 79.1	·주재공원 인조화강석 블록 포장 ·메모리얼 가벽 석재마감	유진건설 원광건설
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	24	’12.9 ~ ’13.9	79.3	0.3	79.6 79.4	·가로등, 공원등 기초설치 ·신호등 4개소 설치	금평 전설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	35	’10.12 ~ ’13.12	97.2	0.1	97.3 97.3	·신경천 교대 1, 2 벽체 및 날개벽 콘크리트 타설	성보 건설
2구역 조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	44.0	1.1	45.1 44.7	·연결 4, 5, 8호 교목식재 ·조경식재구간 제초작업	승화 건설
2구역 전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	54.3	0.6	54.9 54.9	·대로1-2 LP-19 가로등 건주 작업	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	13.2	-	13.2 13.2	·열배관 공사	롯데 건설
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,424	’11. 7 ~ ’15. 6	63.5	0.1	63.6 63.6	·홍북터널(중앙터널)굴착, 송석교 하부공	동성 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	51.8	0.7	52.5 52.5	·11층∼18층 작업	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	49.7	0.6	50.3 50.3	·13층∼21층 작업	진흥 기업
RH-7BL(LH) APT건립공사	․연면적 312천㎡ ․2,127세대	3,224	`12.12 ~ `15.09	17.9	0.3	18.2 21.1	·1층 바닥타설 작업	서희 건설
충공임대빌딩 신 축 사 업	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층	147	’12.11 ~ ’14.01	68.7	3.1	71.8 71.7	·외벽 마감공사 ·내부 조적 및 미장공사	명승건설산업