내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2013. 10. 24. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13.11	99.3	0	99.3 99.3	·우수관로 준설 및 CCTV ·도로안전표지판 설치	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.12	96.7	0.4	97.1 97.1	·소로1-9 오수관로 시공 ·대로2-10 보도부 시공	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.12	95.1	0.2	95.3 95.1	·대로3-7 오수관로 시공 ·대로3-5, 중로2-7 아스콘 포장	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	510	’11. 8 ~ ’14. 7	81.8	0.7	82.5 79.1	·도로 노상 및 경계석 설치 ·단지내부 관로공사 시행	코오롱 글로벌
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	64.6	1.3	65.9 64.5	·단독필지등 우·오수부설 ·자경천 자연석 쌓기	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13.10	100	0	100 100	·유지관리운전 시행	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’14.01	97.2	0.2	97.4 99.1	·1집하장 보도부 포장 ·2집하장 외부 건축마감공사	포스코 건설
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡ (애향공원 포함)	78	’12.10 ~ ’13.10	93.4	1.1	94.5 94.5	·주재공원 인조화강석 블록 포장 ·메모리얼 가벽 석재마감	유진건설 원광건설
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	24	’12.9 ~ ’13.9	81.5	2.6	84.1 84.6	·가로등, 공원등 기초설치 ·신호등 4개소 설치	금평 전설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	35	’10.12 ~ ’13.12	97.7	0.1	97.8 97.8	·신경천 교량 슬래브 거더 구간 철근 조립	성보 건설
2구역 조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	47.4	0.9	48.3 49.1	·완충1, 2호 교목식재 ·연결7호 경화토 포장	승화 건설
2구역 전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	59.7	1.1	60.8 60.8	·대로2-1 가로등 설치	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	13.2	-	13.2 13.2	·열배관 공사	롯데 건설
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,424	’11. 7 ~ ’15. 6	64.0	0.1	64.1 64.1	·홍북터널 중앙벽체 시공 ·송석교 상부공 시공	동성 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	59.3	3.4	62.7 62.7	·16층∼20층 작업	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	56.9	2.3	59.2 59.2	·16층∼24층 작업	진흥 기업
RH-7BL(LH) APT건립공사	․연면적 312천㎡ ․2,127세대	3,224	`12.12 ~ `15.09	19.3	0.6	19.9 21.7	·1층 바닥타설 작업	서희 건설
충공임대빌딩 신 축 사 업	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층	147	’12.11 ~ ’14.01	82.9	1.8	84.7 84.7	·내부천정 마감 공사 ·외부비계 철거 및 외벽마감	명승건설산업