내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2013. 11. 07. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13.11	99.4	0.2	99.6 99.6	·교육청 U턴구간 포장공사 ·보도 및 경계석 보수작업	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.12	97.4	0.3	97.7 97.7	·소로1-9 도로부 골재 포설 ·상수 수압시험 시행	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.12	95.9	0.6	96.5 96.3	·대로3-7 동상방지층 포설 ·우수관로 준설 및 CCTV	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	510	’11. 8 ~ ’14. 7	82.9	0.6	83.5 81.9	·도로 노상 및 경계석 설치 ·단지내부 관로공사 시행	코오롱 글로벌
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	66.5	0.4	66.9 66.3	·단독필지등 우·오수부설 ·도로 노상 및 경계석 설치	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13.10	100	0	100 100	·유지관리운전 시행	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’14.01	97.7	0.2	97.9 100	·1집하장 시운전 추진 ·2집하장 건축/조경 마감공사	포스코 건설
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡ (애향공원 포함)	78	’12.10 ~ ’13.10	94.9	0.8	95.7 95.7	·화장실 내외부 마감공사 ·부대공사 잔손보기	유진건설 원광건설
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	24	’12.9 ~ ’13.9	84.9	0.6	85.5 85.5	·CCTV 기초설치 ·가로등 건주	금평 전설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	35	’10.12 ~ ’13.12	97.9	0.2	98.1 98.1	·신경천 교량 접속슬래브 버림 Con'c 타설	성보 건설
2구역 조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	49.1	1.2	50.3 51.0	·근린5호 잔디식재 ·연결 5, 7, 9호 수목식재	승화 건설
2구역 전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	61.7	0.8	62.5 62.5	·대로3-7 가로등 배관설치 ·대로2-4 보안등 설치	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	13.2	-	13.2 13.2	·열배관 공사	롯데 건설
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,424	’11. 7 ~ ’15. 6	68.0	0.1	68.1 68.1	·홍북터널 중앙벽체 시공 ·송석교 상부공 시공	동성 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	64.5	0.4	64.9 64.9	·옥탑층 골조공사 ·내부 인테리어공사 추진	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	61.6	0.6	62.2 62.2	·23층∼26층 작업	진흥 기업
RH-7BL(LH) APT건립공사	․연면적 312천㎡ ․2,127세대	3,224	`12.12 ~ `15.09	20.9	0.8	21.7 22.0	·3~4층 바닥타설 작업	서희 건설
충공임대빌딩 신 축 사 업	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층	147	’12.11 ~ ’14.01	87.9	2.7	90.6 90.6	·내부천정 마감 공사 ·외벽유리 시공	명승건설산업