내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2014. 01. 02. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13.11	100	0	100 100	·공사준공	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.12	99.9	0.1	100 100	·공사준공	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.12	99.9	0.1	100 100	·공사준공	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	510	’11. 8 ~ ’14. 7	85.7	0.1	85.8 84.8	·도로 노상 및 경계석 설치 ·단지내부 관로공사 시행	코오롱 글로벌
1-3공구 조성공사	․면적 389천㎡	160	’13. 11 ~ ’16. 7	0.7	0.1	0.8 0.8	·현장사무실 가설공사	명지 건설
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	70.0	0.1	70.1 70.1	·단독필지등 우·오수부설 ·도로 노상 및 경계석 설치	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13.10	100	0	100 100	·유지관리운전 시행	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’14.01	99.5	0.1	99.6 100	·1․2집하장 시운전 추진 ·공정별 마무리 보완공사	포스코 건설
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡	78	’12.10 ~ ’15.12	96.8	-	96.8 96.8	·식생유지관리	유진건설 원광건설
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	24	’12.9 ~ ’14.4	93.5	0.1	93.6 93.6	·CCTV 기초설치 ·가로등 건주	금평 전설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	35	’10.12 ~ ’13.12	100	0	100 100	·공사준공	성보 건설
2구역 조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	57.8	0.1	57.9 57.9	·현장내 청소 및 자재정리 ·근린3호 데크로드 설치	승화 건설
2구역 전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	69.5	0.1	69.6 69.6	·신경1교 경관조명 설치 ·대로2-7 신호등 건주작업	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	13.2	-	13.2 13.2	·열배관 공사	롯데 건설
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,424	’11. 7 ~ ’15. 6	68.8	0.1	68.9 68.9	·홍북터널 중앙벽체 시공 ·송석교 상부공 시공	동성 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	74.0	2.8	76.8 76.8	·외부 도색 및 토목공사 ·내부 인테리어공사 추진	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	70.7	3.9	74.6 74.6	·옥탑층 골조공사 ·내부 인테리어공사 추진	진흥 기업
RH-7BL(LH) APT건립공사	․연면적 312천㎡ ․2,127세대	3,224	`12.12 ~ `15.09	24.0	0.2	24.2 24.6	·5~6층 바닥타설 작업	서희 건설
충공임대빌딩 신 축 사 업	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층	147	’12.11 ~ ’14.01	99.9	0	99.9 99.9	·마감작업 및 잔손보기	명승건설산업