	業 務 報 告	‘14. 1. 7 (화)
		신도시개발지원과장
		☎ 2920
제목 : 내포신도시 개발사업(1단계) 준공계획 보고

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 충남도청(내포) 신도시 개발사업(1단계)

❍ 사업면적 : 9,951,729.1㎡ (1단계 : 1,835,843.0㎡)

❍ 사업시행자 : 충청남도개발공사, 한국토지주택공사

❍ 전체 사업기간 : 2007. 7. 20 ~ 2020. 12. 31

□ 1단계 : 2007. 7. 20 ~ 2013. 12. 31

❍ 전체사업비 : 2조 5,692억원

(보상비 8,400억원, 공사비 12,285억원, 기타비용 5,007억원)

□ 1단계 : 3,198억원(용지비 1,546, 개발비 1,652)

구 분		면 적(㎡)	필 지	비고
합 계		1,835,843.0	855
주거용지	단독주택	112,230.8	428
	공동주택	280,684.2	11
상업시설	중심상업	96,770.7	54
	근린상업	17,510.4	19
업무시설	행정타운	237,195.0	6
	비지니스파크	95,583.9	34
기반시설	도 로	594,665.7	93
	보행자도로	29,739.2	74
	주 차 장	21,039.8	36
	공 원	93,870.9	13
	녹 지	122,559.9	62
	공공공지	60,581.9	3
	광 장	6,056.9	6
	교육시설	43,412.6	4
	공공청사	3,503.2	3
	복합커뮤니티시설	11,417.1	7
	배 수 지	8,655.3	1
기 타	농업관련시설	365.5	1

<조성토지 현황>

□ 그동안 추진사항

❍ ‘07. 07. 20 : 충남도청 이전신도시 도시개발구역지정 고시

❍ ‘13. 12. 27 : 내포 신도시 개발사업 개발계획 및 실시계획 변경 승인 고시

❍ ‘13. 7월~‘13. 12월 : 1단계사업 준공구역 시설물 점검(15회) 및 보완조치

❍ ‘13. 12. 30 : 내포 신도시 개발사업 1단계 준공서류 접수(충남개발공사→道)

❍ ‘13. 12. 30 : 1단계 사업 준공을 위한 관계기관 협의

□ 향후 추진계획

❍ ‘14. 1. 13 : 관계기관 협의완료

❍ ‘14. 1. 13 ~ 1. 15 : 관계기관 협의의견 검토

❍  ‘14. 1. 15 ~ 1. 22 : 준공검사 실시(道)

❍  ‘14. 1. 27 : 준공검사필증 교부(道→시행자)

❍  ‘14. 2. 3 : 공사완료공고(道知事)

< 사업준공검사 절차 >

준공검사 신 청 (‘13.12.30)	▶	관계기관 협 의 (‘13.12.31 ~‘14.1.13)	▶	준공검사 (‘14.1.15 ~‘14.1.22)	▶	준공검사 필증교부 (‘14.1.27)	▶	공사완료 공 고 (‘14.2.3)
사 업 시행자		관계기관		道		道		道
특별법 제20조 시행조례 제11조		인허가의제 사항		특별법 제20조		특별법 제21조		특별법 제21조

※ 「도청이전을 위한 도시건설 및 지원에 관한 특별법」 제21조

도지사는 제20조제1항에 따른 준공검사를 한 결과 도청이전신도시 개발사업이 실시계획대로 완료되었다고 인정되는 경우에는 사업시행자에게 준공검사필증을 교부하고 공사완료의 공고를 하여야 한다