내포신도시 개발사업 주간공정 보고(2014. 06. 26. 현재)

《 추진 중 》

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
▣ 부지조성
1-1공구 조성공사	․면적 1,501천㎡	509	’11. 8 ~ ’14. 7	91.7	0.4	92.1 92.1	·대로 3-11 우수받이 설치	코오롱 글로벌
1-3공구 조성공사	․면적 429천㎡	160	’13. 11 ~ ’16. 7	26.3	0.8	27.1 26.5	·대로 2-12호 우수암거 부설	명지 건설
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	318	’12. 1 ~ ’15. 1	77.9	0.5	78.4 78.4	·대로2-1 아스콘포장	동성 건설
▣ 조 경
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡	78	’12.10 ~ ’15.12	96.8	-	96.8 96.8	·식생유지관리	유진건설 원광건설
2구역 조경공사(충개공)	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	76.4	1.0	77.4 76.5	·근린공원7호 포장구간 터파기	승화 건설
2단계구역 조경공사(LH)	․면적 2,676천㎡	370	‘14.11~				‘14. 11 착공예정
홍예공원 조성공사(LH)	․면적 326천㎡	300	‘14.07~				‘14. 07 착공예정
▣ 전 기
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	28	’12.9 ~ ’14.06	99.1	0.2	99.3 99.3	·CCTV 설치 ·가로등 건주	금평 전설
2구역 전기공사(충개공)	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	83.0	0.5	83.5 83.5	·공원등 제어반 단말처리	삼흥 전력
2단계구역 전기공사(LH)	․면적 2,676천㎡	90	‘14.06~				‘14. 07 착공예정
▣ 기반시설
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 374.1 Gcal/h	6,116	’11. 7 ~ ’20.12	14.3㎞	-	14.3㎞ 14.3㎞	·열배관 공사	롯데 건설
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,459	’11. 7 ~ ’15. 6	78.0	2	80.0 80.0	·홍북터널 라이닝 시공 ·포장층시공	동성 건설
U-city 2단계 관로공사	․면적 2,676천㎡	6	‘14.03~	10.4	0.8	11.2 11.2	전기 및 통신관로설치 공사
U-City 2단계 시설공사	․면적 2,676천㎡	80	‘14.07~				‘14. 07 착공예정
▣ 건 축
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․915세대	1,882	’12.05 ~ ’14.09	91.6	0.9	92.5 92.3	·외부 조경 및 외부페인트 도색 ·내부 인테리어공사 추진	진흥 기업
RH-7BL(LH) APT건립공사	․연면적 312천㎡ ․2,127세대	3,224	`12.12 ~ `15.09	44.3	0.8	45.1 47.1	·14~23층 바닥타설 공사	서희 건설
경남APT 건립공사	․연면적 147천㎡ ․990세대	1,340	’13. 9 ~ ’16.01	17.6	0.9	18.5 18.9	·지하층 ~ 10층 골조공사	경남 기업
중흥APT 건립공사	․연면적 106천㎡ ․1,660세대	2,100	’13.10 ~ ’16.04	7.1	1.7	8.8 8.3	·지하층 ~ 3층 골조공사	중흥 건설
모아APT 건립공사	․연면적 190천㎡ ․1,260세대	1,615	’13.10 ~ ’16.05	14.2	1.8	16.0 16.5	·지하층 ~ 3층 골조공사	모아주택산업
내포제나우스 (오피스텔)	․연면적 24,390㎡ ․350호	275	’13. 6 ~ ’14.10	63.0	3.0	66.0 66.0	·내부공사	상리 건설
현대아산빌엔더스(오피스텔)	․연면적 29,998㎡ ․528호	326	’13. 5 ~ ’14. 8	82.2	1.5	83.7 83.7	·내부공사	현대 아산(주)
내포아르페온 1차(오피스텔)	․연면적 23,061㎡ ․313호	275	’13. 4 ~ ’14. 6	96.0	2.0	98.0 98.0	·마감공사	국제디아이(주)

《 준   공 》

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
▣ 부지조성
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13.11	100	-	100 100	·공사준공	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.12	100	-	100 100	·공사준공	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.12	100	-	100 100	·공사준공	현대 아산
▣ 조 경
▣ 전 기
▣ 기반시설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일 중 1단계22천톤/일	664	’10.10 ~ ’13.10	100	-	100 100	·유지관리운전 시행	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로22.1㎞	750	’10.10 ~ ’14.01	100	-	100 100	·유지관리운전 시행	포스코 건설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	35	’10.12 ~ ’13.12	100	-	100 100	·공사준공	성보 건설
▣ 건 축
충공임대빌딩 신 축 사 업	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층	147	’12.11 ~ ’14.01	100	-	100 100	·공사준공	명승건설산업
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	100	-	100 100	·공사준공(‘14.05.30)	극동 건설