유류피해 극복기념관 사업추진계획서

(충청남도 서해안유류사고지원과)

	<개 요>
위 치 : 태안군 소원면 의항리 898번지 일원 7필지 규 모 : 부지면적 11,138㎡ / 연면적 2,018㎡(지하1층・지상2층) 사업비 : 11,565백만원(공사비 10,475, 용지보상비 1,090) 기 간 : 2014.9~2016.12(28개월)

사업배경 및 목적

1

가. 배   경

○ 허베이 스피리트호 유류오염사고로 인해 서해안 일대의 해상 및 해안가로 다량의 기름이 유출되어 사상최악의 환경오염이 초래됨

○ 사고로 인해 태안을 방문하는 방문객 수도 현저하게 감소하여 태안지역 경제에 부정적 영향을 미침

나. 목   적

○ 해양오염사고에 대한 경각심고취 및 서해안의 기적을 이룬 123만 자원봉사자들의 숭고한 뜻을 보전

○ 특별재난지역 극복 경험을 전승하고 해양오염이 생태계는 물론 주민들의 삶에 어떤 영향을 미쳤는지에 대한 교육정보 제공

○ 관광객들에게 볼거리 제공으로 태안군 경제 활성화에 기여

예산집행 및 총괄표

2

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	‘13예산	‘14예산	‘15예산	‘16예산
계	11,565	1,090	4,500	1,351	4,624
국 비	10,475	-	4,500	1,351	4,624
지방비	1,090	1,090	-	-	-

연도별 사업추진계획 및 산출근거

3

가. 2014년도

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	이월액	사업별 및 소요금액	비 고(일정)
4,500	501	3,999	○기본 및 실시설계 : 501	○기본계획수립 : 9월 ○기본 및 실시설계 : 10～12월

※ 이월액은 ‘15년도 1/4분기 건축비에 반영하여 조기사업 추진으로 공기 단축에 기여할 계획임

나. 2015년도

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	사업별 및 소요금액	비 고
1,351	5,350 (이월액 3,999포함)	○토목공사 : 626 ○건축공사 : 4,572(95.3%) ○시설 부대경비 : 152 - 감리비 : 125 - 시설부대비 : 27	○사업기간 : 1～12월 ○산출근거 참조 ○건축공사 총액 : 4,799백만원

다. 2016년도

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	사업별 및 소요금액	비 고
4,624	4,624	○건축공사 : 227(4.7%) ○방재 체험실 : 96 ○전시물제작설치비 : 3,871 - 상설전시실 : 3,525 - 기획전시실 : 346 ○신․재생에너지 설치비 : 207 ○조경공사비 : 216 ○주차장공사비 : 7	○사업기간 : 1～12월 ○산출근거 참조

라. 항목별 산출근거

(단위 : 백만원)

항 목 별	산 출 근 거	금 액
소 계	※ 부가가치세 및 예비비 포함하여 산출	10,475
∙기본 및 실시설계	∘1식 × 501백만원	501
∙토목공사(부지조성)	∘20,699㎡ × 26,206원 × 1.1 × 1.05%	626
∙건 축 공 사	∘2,018㎡ × 2,059천원 ×1.1×1.05%	4,799
∙감 리 비	∘9,421백만원 × 1.14(요율)×1.1×1.05%	125
∙시설부대비	∘9,421백만원 × 0.25(요율)×1.1×1.05%	27
∙조 경 공 사	∘3,105㎡ × 60,295원 × 1.1 × 1.05%	216
∙주차장공사	∘166㎡ × 34,598원 × 1.1 × 1.05%	7
∙방재 체험실	∘720㎡ × 115천원 × 1.1 × 1.05%	96
∙상설전시실	∘5개관 × (235∼936)백만원 × 1.1 × 1.05%	3,525
∙기획전시실	∘1개관 × 300백만원 × 1.1 × 1.05%	346
∙신·재생에너지	∘27.4kW × 653만원 × 1.1 × 1.05%	207

※ 기재부「유류피해극복기념관 건립」‘13년도 사업계획 적정성 재검토용역보고서(KDI) 참조

건물기능별 현황 및 배치도

4

구 분	건물현황 및 면적	비 고
∙전시기능(1,141㎡)	전시실(694), 전시준비실(91), 영상실(45), 수장고(230), 문서고(37), 기자재보관실(44)	1층
∙체험․학습기능(230㎡)	학습실(160), 강당(40), 자료실(30), *방재체험실(외부설치),	2층
∙관리․사무기능(163㎡)	경비실(3), 안내실(3), 창고(27) 매표소․물품보관실(30), 사무실(100)	1층
∙휴게기능(73㎡)	직원휴게실(23), 유아휴게실(20), 뮤지엄 숍(30)	1~2층
∙기타(411㎡)	전기․기계실(90), 공용면적(321)	지하층~1층
총면적 2,018㎡

세부추진일정

5

일 정		주 요 내 용
2014년	9~12월	사업계획 협의, 기본․실시설계 용역착수 및 중간 보고회 개최
2015년	1~3월	기본․실시설계 최종보고회, 건축․토목공사 계약(입찰공고, 현장설명, 적격심사 등) 및 착공
	3~12월	건축공사 시행
2016년	1~9월	유류피해 극복 기념관 건축공사 시행 및 전시(상설․기획) 실시시행
	10~12월	개관 및 전시(전시기획·프로그램), 공급(체험활동시설) 및 기념관 홍보 마케팅 지속 개발

위치 및 조감도

6

ㅇ 위치도

ㅇ 조감도