		유류피해극복 기념관 건립 로드맵

【그동안 추진사항】	【향후 추진계획】

￭ 기념관 건립계획 발표 • 이완구 지사 2008. 2. 22		￭ 전시설계‧제작‧설치공사 계약 및 착수 • 협상에 의한 계약(11. 18예정) • 전시설계 착수(11. 23예정) 2015. 11
□		□
￭ 기념관 국비지원계획 확정 • 기획재정부 2014. 8.29		￭ 용역중간보고 및 자문회의 개최 • 전시분야 제안내용 건축설계 협업 보고 ⇨ 자문단 의견 건축 및 전시설계 반영 2015. 12. 2
□		□
￭ 사업추진계획 최종 확정 • 사업계획 지사님 결재 2014. 11. 4		￭ 건축설계용역 완료 • 건축설계용역 추진 - 소요기간 8개월(2015. 5 ~ 12) 2015. 12
□		□
￭ 설계 및 시공의뢰 → 종건소 • 공모, 기본 및 실시설계, 건축, 감리 등 ⇨ 道 영선공사 집행에 대한 지침 2015. 12. 24		￭ 용역최종보고 및 지사님 보고 • 건축+전시설계 협업 및 자문단 의견 반영한 설계 최종결과 보고 • 용역최종보고 후 지사님 대면보고 예정 ⇨ 지사님 의견은 설계변경 등 반드시 반영 2016. 1
□		□
￭ 건립부지 사용 동의(태안군→도) • 공유재산 및 물품관리법 시행령 제9조 2014. 12. 31		￭ 건축공사 착(준)공 • 소요예상기간 12개월 2016. 1 ~ 2016. 12.
□		□
￭ 공유재산 관리계획 수립 및 道 의회 의결 • 공유재산 및 물품관리법 제 10조, 道공유재산관리조례 제12조 2015. 2. 5		￭ 전시설계‧제작 설치 착(준)공 • 소요예상기간 15개월 (설계4, 제작설치 11) 2015. 11 ~ 2017. 2.
□		□
￭ 기본 및 실시설계용역 착수(건축) • 사업자 결정방식 확정 및 입찰공고 • 사업수행능력 평가 및 낙찰자 선정 • 건축설계용역 착수(5. 19) 2015. 4 ~ 5		￭ 운영 관리 주체 결정 • 전시설계용역 결과를 토대로 태안군 위임 또는 공익재단 위탁 등 검토‧결정 • 태안군 위임시 道 사무위임 조례 개정 2016. 2 ~ 2016. 12
□		□
￭ 전시설계 및 제작설치 제안서 공모 및 평가 • 제안서(안) 작성 및 계약방법 확정(조달청) • 제안서 평가 및 우선 협상대상자 선정 2015. 7 ~ 10		￭ 기념관 시설물 시운전 • 건축, 전시, 전기 등 시설물 시운전 2017. 3 ~ 4
		□
		￭ 기념관 개관 및 위임(위탁) • 기념관 개관(10주년 행사연계) • 운영주체 관리위임 → 태안군 또는 공익법인 등 2017. 5