			2015. 8.

내포문화권 개발사업 추진현황

	충 청 남 도
	건설정책과

간월호 관광도로 개설공사 추진현황

□ 사업개요

❍ 위    치 : 서산시 인지면 모월리 ~ 해미면 전천리 일원

❍ 사 업 량 : L=13.96㎞, B=12.0m, 교량 3개소, 배수공 1식

❍ 사 업 비 : 48,830백만원(공사비 35,144, 보상비 등 13,686)

❍ 연차별 투자계획                               (단위 : 백만원)

구 분	총 계	기투자	‘15년	장 차	비고
합 계	48,830	29,043	9,100	10,687
공 사 비	35,144	15,954	8,615	10,575
보 상 비	10,798	10,528	270	-
감리비 등	2,888	2,561	215	112

❍ 사업기간 : 2012. 3. 2 ～ 2017. 11. 2   ※ 종합진도 59.4%

❍ 시 공 사 : 중흥건설(주) 외 1개사

❍ 감 리 자 : 극동엔지니어링(주) 외 1개사

□ 그동안 추진상황

❍ 보 상 : 대상 755필지 130천㎡ / 실적 724필지 128천㎡ (잔여 31필지 : 농어촌공사)

❍ 공 사

- 토  공 : 흙쌓기(순성토) 257천㎥ 중 150천㎥ 반입

- 포장공 : 아스콘포장 557천㎡ 중 70천㎡ 시공

- 교량공 : 3개소중 / 1개소 완료(덕지천교), 2개소 공사중(돌장교,야당천교)

□ 앞으로 추진계획(2015.08)

❍ 토  공 : 흙쌓기(순성토) 107천㎥ 추가 반입

❍ 포장공 : 아스콘포장 119천㎡ 추가 시공

❍ 교량공 : 교량 2개소 완료(돌장교, 야당천교)

[붙임1] 위치도

신설

4.91

기존도로

덧씌우기

3.78

확장

5.27

L=13.96km

내포보부상촌 조성사업 추진현황

□ 사업 개요

❍ 위치/규모 : 예산군 덕산면 사동리 271-1번지 일원 / A=51,205㎡

❍ 총사업비 : 44,700백만원(국비 22,350, 도비 17,880, 군비 4,470)

※ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자		확보	향후투자계획
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
계		44,700	3,800	9,006	4,655	9,450	8,950	8,839
사업비	국 비	22,350	2,000	1,506	3,405	5,500	5,000	4,939
	도 비	17,880	1,400	6,000	1,000	3,160	3,160	3,160
	군 비	4,470	400	1,500	250	790	790	740

❍ 사업기간 : 2013년 ~ 2018년(6년간)

❍ 주요시설 : 전시관, 난장･장터･어귀･놀이마당, 체험공방, 이야기길 등

□ 그동안 추진 사항

❍ 2014.  2. 17 : 기본 및 실시설계용역 착수

- ㈜도화엔지니어링 등 5개사 공동도급, ‘14.2.17 ~ ’14.12.14, 858백만원

❍ 2014.  5.  7 : 기본 및 실시설계용역 중지(‘14.5.7. ~ 9.19, 약 4개월 지연)

※ 중지사유 : 전시연출설계용역 및 관리운용기본계획과 연계추진

❍ 2014.  6. 13 : 관리운용 기본계획수립 용역 착수(‘14.10.27일 용역중지)

- ㈜진화기술공사, ‘14.6.13 ~ ’14.12.31, 47백만원

❍ 2014.  8. 26 : 유통문화전시관 설계 및 제작설치 용역 착수

- ㈜옥토끼이미징 등 2개사 공동도급, ‘14.8.26 ~ ’18.12.31, 4,483백만원

❍ 2014. 10. 17 : 내포보부상촌 조성사업 자문위원회 개최

❍ 2014. 12.  4 : 문화유적발굴(시굴) 및 표본조사 용역 착수

- 충남역사문화연구원, ‘14.12.4 ~ ’15.1.22, 59백만원

❍ 2015. 6. : 문화재청 협의 및 환경영향평가 협의 완료

➭ 현재 수정된 기본계획에 대한 자문위원회 및 문화재청 협의 완료

□ 예산집행 및 토지보상 현황

❍ 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구 분		예산액 (2014까지)	집 행 액			잔 액	비 고 (집행률)
			계	2013년	2014년
계		12,806	6,619	1	6,618	6,187	51.7%
사업비	국 비	3,506	602	1.0	601	2,904	17.2%
	도 비	7,400	5,130		5,130	2,270	69.3%
	군 비	1,900	887		887	1,013	46.7%

❍ 토지보상 현황

(단위 : 백만원)

구 분	필지수	금 액	보상협의 완료		보상 미협의		비 고
			필지수	금액	필지수	금액
계		7,967	35	5,976		1,991	75.0%
토 지	41	7,602	35	5,738	6	1,864
지장물	28	314	22	204	6	110
영 농	11	51	9	34	2	17

□ 문제점

❍ 용역 중지 등으로 당초 추진계획 대비 지연됨에 따라 공사 착수시기 지연 및 자금집행이 어려움

용역 지연 사유

○ 전시설계 연출용역 및 관리운용 계획과 연계 추진하기 위해 기본 및 실시설계용역 일시 중지

⇨ 유통문화 전시관 전시설계 연출 및 제작설치 용역 업체 선정까지 약 4.5개월간 중지

【용역 연계추진 사유】

1. 설계단계부터 전시･연출 및 관리운용분야와 연계하여 추진함으로 설계 완성도 향상

2. 기본 및 실시설계완료 후 전시･연출 설계시 결정된 구조 및 공간에 한정됨으로 용역 연계추진으로 창의성 및 효율성 향상 도모

3. 향후 시설의 효율적이고 경제적인 운용관리 및 활성화 전략과 부합하는 설계 추진

○ 주민설명회(‘14.5.14)및 자문위원회(’14.10.17) 개최 등 다양한 의견수렴 및 조정･반영 기간 소요(기본계획 변경)

□ 향후 추진계획

❍ 2015. 08. : 지역개발조정위원회 심의 및 실시계획 승인

❍ 2015. 11. ~ 2018. 12. : 내포보부상촌 조성사업 공사 추진 및 완료

[붙임1] 위치도

[붙임2] 기본계획도면