참 고	-	연안정비사업 시행절차

☜ 연안정비계획에 반영된 사업에     한정하여 당해 연도 예산요구

사업예산 요구 및 확정

(지자체→해양수산부→기획재정부→국회)

□

국고보조금 신청 및 교부

(지자체→해양수산부→지자체)

☜ 반영된 예산에 대해 광역지자체      (시도)에서 보조금 교부신청

□

☜ 20억원이상 사업은 사전에 정밀     조사 및 원인분석 후, 설계실시

☜ 연안정비사업 설계기준서 준용

☜ 타 계획 연계 및 이해당사자      의견수렴 등

☜ 자연경관 및 생태계, 해양환경 검토

연안정비사업 설계

(지방자치단체)

□

☜ 연안관리법 의제사항(공유수면       매립, 점사용 등) 협의

☜ 관계기관(해양수산부, 지방해양     항만청, 관할부대 등) 협의

실시계획(안) 협의

(지자체→관계기관)

□

☜ 관보게재 및 해양수산부 보고

실시계획 수립

(지방자치단체)

□

연안정비사업 시행

(지방자치단체)

□

연안정비사업 준공 및 사후관리

(지방자치단체)

☜ 해양수산부 준공보고

참 고	-	2017년 연안정비사업 지구별 추진 현황

1

당진시 한진지구 연안정비사업

◈ 위    치 : 당진시 송악읍 한진리 일원

◈ 사 업 량 : 해변산책로 L= 215m, 전망대 설치

◈ 사 업 비 : 2,400백만원 (공사비 2,391 부대비 9 설계비(별도실시))

◈ 사업기간 : 2016.01. ~ 2019.05.

그동안 추진상황(실적)

❍ ’09. 05. 27 : 제2차 연안정비사업 반영지구 확정(해양수산부)

❍ ’15. 06. 24 : 투융자심사 및 용역심의 완료

❍ ’15. 06. 27 : 용역비용 확보(시비 142백만원/ 별도 설계)

❍ ’15. 07. 08 : 기본 및 실시설계 용역 착수(송현 R&D/ 시비 80백만원)

❍ ’15. 11. 03 : 일반해역이용협의 용역 착수(드림이엔지/ 시비 62백만원)

사업추진 계획

(단위 : 백만원)

공종별	총 사업비	2016년 까지		2017년도 예산현액 (국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)					2018년 이후
		예산액	집행액	계	2017년도 예산			전년도 이월액	계
					국 비	도 비	시군비
계	2,400	200	0	994	397	119	278	200 (국 100/도 30/시 70)	1,406
공사비	2,391	199	0	989	395	118.4	276.6	199	1,402
부대비	9	1	0	5	2	0.6	1.4	1	4

2017년 추진일정(계획)

❍  ’17. 01.  : 기본 및 실시설계와 일반해역이용협의 용역 완료

❍  ’17. 05.  : 실시계획 협의 승인(해수부)

❍  ’17. 06.  : 연안정비사업 계약 및 착공

❍  ’19. 05.  : 연안정비사업 준공

위 치 도

조 감 도

2

보령시 장고도지구 연안정비사업

◈ 위    치 : 보령시 오천면 삽시도리 장고도 일원

◈ 사 업 량 : 호안조성 L= 480m

◈ 사 업 비 : 2,748백만원(공사비 2,609  설계비 등 139)

◈ 사업기간 : 2016.01. ~ 2018.12.

◈ 용 역 사 : ㈜ 우빈

그동안 추진상황(실적)

❍ ’14. 10. 02 : 제2차 연안정비사업(변경) 기본계획 확정(해양수산부)

❍ ’16. 02. :  관련계획 검토 및 현황분석을 통한 사업추진계획 수립 중

❍ ’16. 04. 18 :  기본 및 실시설계 용역 착수(우빈(주)/ 68백만원)

사업 추진계획

(단위 : 백만원)

공종별	총 사업비	2016년 까지		2017년도 예산현액 (국비 70%, 도비 9%, 시비 21%)					2018년 이후
		예산액	집행액	계	2017년도 예산			전년도 이월액	계
					국 비	도 비	시군비
계	2,748	57	35	872	595	76	179	22 (국 15/도 2/시 5)	1,841
공사비	2,609	0	0	772	540.2	68.6	163.2	0	1,837
부대비	9	1	1	4	2.8	0.4	0.8	0	4
설계비 및 용역	130	56	34	96	52	7	15	22	0

2017년 추진일정(계획)

❍ ’ 17. 01 : 기본 및 실시설계 진행 및 해역이용협의 용역 실시

❍ ’17. 05 : 연안정비사업 계약 및 착공

❍ ’18. 12 : 연안정비사업 준공

위 치 도

계 획 도

3

서천군 원수지구 연안정비사업

◈ 위    치 : 서천군 장항읍 원수리, 도삼리 일원

◈ 사 업 량 : 호안조성 L= 564m, 보행데크 L= 300m

◈ 사 업 비 : 3,098백만원(공사비 2,940 설계비 등 158)

◈ 사업기간 : 2016.01. ~ 2018.12.

◈ 용 역 사 : ㈜ 기산엔지니어링

그동안 추진상황(실적)

❍ ’09. 05. 27 : 제2차 연안정비사업 반영지구 확정(해양수산부)

❍ ’16. 02. :  관련계획 검토 및 현황분석을 통한 사업추진계획 수립 중

❍ ’16.  07 : 기본 및 실시설계 용역 착수(기산엔지니어링(주)/88백만원)

사업 추진계획

(단위 : 백만원)

공종별	총 사업비	2016년 까지		2017년도 예산현액 (국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)					2018년 이후
		예산액	집행액	계	2017년도 예산			전년도 이월액	계
					국 비	도 비	시군비
계	3,098	66	34	832	400	120	280	32 (국 16/도 5/시 11)	2,232
공사비	2,940	0	0	712	355.5	107.5	249	0	2,228
부대비	8	1	0	4	1.5	0.5	1	1	4
설계비 및 용역	150	65	34	116	43	12	30	31	0

2017년 추진일정(계획)

❍  ’17.  02 : 기본 및 실시설계용역 및 해역이용협의 용역 실시

❍  ’17.  05 : 연안정비사업 착공

❍  ’18.  12 : 연안정비사업 준공

위 치 도

단 면 도

4

서산시 왕산포지구 연안정비사업

◈ 위    치 : 서산시 지곡면 중왕리 일원

◈ 사 업 량 : 호안조성 L= 630m

◈ 사 업 비 : 1,400백만원 (공사비 1,361 설계비 등 39)

◈ 사업기간 : 2016.01. ~ 2018.12.

그동안 추진상황(실적)

❍ ’14. 10. 02 : 제2차 연안정비사업(변경) 기본계획 확정(해양수산부)

❍ ’16. 02. :  관련계획 검토 및 현황분석을 통한 사업추진계획 수립 중

❍ ’16. 11. :  장기계속 사업으로 추진을 위한 관련절차 진행

사업 추진계획

(단위 : 백만원)

공종별	총 사업비	2016년 까지		2017년도 예산현액 (국비 70%, 도비 9%, 시비 21%)					2018년 이후
		예산액	집행액	계	2017년도 예산			전년도 이월액	계
					국 비	도 비	시군비
계	1,400	35	0	535	350	45	105	35 (국 25/도 3/시 7)	865
공사비	1,254	0	0	392	274.6	35.22	82.18	0	862
부대비	6	1	0	3	1.7	0.08	0.22	1	3
설계비 및 용역	140	34	0	140	73.7	9.7	22.6	34	0

2017년 추진일정(계획)

❍  ’17.  01 : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍  ’17. 09 : 기본 및 실시설계용역 및 해역이용협의 용역 완료

❍  ’17.  10 : 연안정비사업 착공

❍  ’18. 12 : 연안정비사업 준공

위 치 도

계 획 도

5

홍성군 남당지구 연안정비사업

◈ 위    치 : 홍성군 서부면 남당리 일원

◈ 사 업 량 : 양빈 120,000㎥ 조성, 친수데크 L= 100m, 생태 체험로 L=300m

◈ 사 업 비 : 6,350백만원 (공사비 6,000 설계비 등 350)

◈ 사업기간 : 2016.01. ~ 2019.12.

◈ 용 역 사 : ㈜세일종합기술공사

그동안 추진상황(실적)

❍ ’14. 10. 02 : 제2차 연안정비사업(변경) 기본계획 확정(해양수산부)

❍ ’16. 02. :  관련계획 검토 및 현황분석을 통한 사업추진계획 수립 중

❍ ’16. 06. 16 : 기본·실시설계 용역 착수(세일종합기술공사(주)/193백만원)

사업 추진계획

(단위 : 백만원)

공종별	총 사업비	2016년 까지		2017년도 예산현액 (국비 70%, 도비 9%, 시비 21%)					2018년 이후
		예산액	집행액	계	2017년도 예산			전년도 이월액	계
					국 비	도 비	시군비
계	6,350	122	61	1,261	840	108	252	61 (국 42/도 6/시 13)	5,028
공사비	6,030	0	0	1,021	715	92.1	213.9	0	5,009
부대비	30	1	1	10	7	0.9	2.1	0	19
설계비 및 용역	290	121	60	230	118	15	36	61	0

2017년 추진일정(계획)

❍  ’17.  01 : 실시설계용역 및 해역이용협의 용역 추진

❍  ’17.  05 : 연안정비사업 착공

❍  ’19.  12 : 연안정비사업 준공

위 치 도

계 획 도

6

서천군 다사2지구 연안정비사업

◈ 위    치 : 서천군 비인면 다사리 일원

◈ 사 업 량 : 양빈 40,000㎥조성, 호안 L=677m, 친수시설 조성

◈ 사 업 비 : 5,800백만원 (공사비 5,460 설계비 등 340)

◈ 사업기간 : 2017.01. ~ 2020.12.

그동안 추진상황(실적)

❍ ’14. 10. 02 : 제2차 연안정비사업(변경) 기본계획 확정(해양수산부)

❍ ’17. 01. :  관련계획 검토 및 현황분석을 통한 사업추진계획 수립 중

사업 추진계획

(단위 : 백만원)

공종별	총사업비	2017년도 사업비 (국비 70%, 도비 9%, 시비 21%)				2018년 이후
		계	국 비	도 비	시비
계	5,800	300	210	27	63	5,500
공사비	5,460	0	0	0	0	5,460
부대비	40	0	0	0	0	40
설계비 및 용역	300	300	210	27	63	0

2017년 추진일정(계획)

❍  ’17.  02 : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍  ’17. 11 : 기본 및 실시설계용역 완료

❍  ’18. 02  : 연안정비사업 착공

❍  ’20. 12 : 연안정비사업 준공

위 치 도

계 획 도

7

태안군 의항해수욕장지구 연안정비사업

◈ 위    치 : 태안군 소원면 의항2리 일원

◈ 사 업 량 : 호안조성 L= 450m

◈ 사 업 비 : 1,800백만원 (공사비 1,662 설계비 등 138)

◈ 사업기간 : 2017.01. ~ 2019.12.

그동안 추진상황(실적)

❍ ’14. 10. 02 : 제2차 연안정비사업(변경) 기본계획 확정(해양수산부)

❍ ’17. 01. :  관련계획 검토 및 현황분석을 통한 사업추진계획 수립 중

사업 추진계획

(단위 : 백만원)

공종별	총사업비	2017년도 사업비 (국비 70%, 도비 9%, 시비 21%)				2018년 이후
		계	국 비	도 비	시비
계	1,800	200	140	18	42	1,600
공사비	1,662	69	48.3	6.21	14.49	1,593
부대비	8	1	0.7	0.09	0.21	7
설계비 및 용역	130	130	91	11.7	27.3	0

2017년 추진일정(계획)

❍  ’17.  02 : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍  ’17. 10 : 기본 및 실시설계용역 완료

❍  ’17.  11 : 연안정비사업 착공

❍  ’19. 12 : 연안정비사업 준공

위 치 도

계 획 도

8

태안군 꽃지해수욕장지구 연안정비사업

◈ 위    치 : 태안군 안면읍 중장리 일원

◈ 사 업 량 : 사구복원 3,000m 산책로 2,950m 방풍림 580m 표사차단공 430m

◈ 사 업 비 : 21,719백만원/ 국비 100%

(공사비 17,912 감리·설계비 등 3,807)

◈ 사업기간 : 2016. 3. 10 ~ 2020. 9. 30(종합진도 10%)

◈ 시 행 청 : 대산지방해양수산청/ 시공회사 : ㈜청암종합건설외 2개사

그동안 추진상황(실적)

❍ ’15. 12. : 연안정비사업 실시설 계 용역 완료

❍ ’16. 01. : 연안정비사업 발주

❍ ’16. 03. 10 : 연안정비사업 공사 착수(표사 차단공 설치 등)

사업 추진계획

(단위 : 백만원)

공종별	총사업비	2016년 까지		2017년도 예산 (국비 100%)	2018년 이후
		예산액	집행액	국비	예산액
계	21,719	3,238	3,238	3,983	14,498
공사비	18,532	1,688	1,688	3,708	13,136
부대비	51	10	10	8	33
감리비	1,836	240	240	267	1,329
설계비 및 용역	1,300	1,300	1,300	0	-

2017년 추진일정(계획)

❍ ’17. 02.    : 남쪽 1.2km 사구복원 및 모래채움 실시

❍ ’20. 9. 30. : 연안정비사업 준공 예정

□ 꽃지해수욕장 연안정비계획 평면 배치도(안)