2021-26

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①정책사업명	도립공원 사업추진			진행 상태	추진중
② 추진배경	안전하고 쾌적한 도립공원 조성 및 관리 자연환경과 지역특성을 고려한 특색있는 공원관리 체계적이고 효율적인 운영을 위한 관리계획 마련
③ 사업개요	과 제 명 : 도립공원 특성화 사업 추진 사업목적 : 자연보전과 이용이 조화로운 도립공원 조성 및 관리 주요 추진내역 ❶ 자연환경보전·이용시설 추진 : 대둔산 생태탐방로 조성 ❷ 덕산도립공원 보전관리계획 수립 ❸ 도립공원 탐방환경 개선 사업 추진 ❹ 도립공원 주민지원사업 추진
④ 사업부서	산림자원연구소 도립공원과		⑤ 담당자			도립공원과장 백동열 시설6 이기세
⑥ 선정기준	도정현안		⑦ 사업기간			2021. 1. ~ 2022. 1.
<그간 주요 추진내용>
○ 도립공원 탐방환경 개선 정비사업 및 자연환경 보전·이용시설 사업 현장조사 계획 - 덕산·칠갑산·대둔산		‘21.02.~03.	이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 한양순 칠갑산관리팀장 백종성 대둔산관리팀장 손송현, 신현성 주무관
○ 도립공원 주민지원사업 추진 - 덕산도립공원 화장실 설치사업 추진계획 수립		‘21.02.26.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 손송현 주무관
○ 덕산도립공원 탐방환경 개선·정비사업 시행결의		‘21.03.23.	이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 손송현 주무관
○ 장곡로 훼손지 및 위험구간 정비공사(탐방환경 개선·정비사업) 시행결의		‘21.03.31.	이태윤 도립공원과장 한양순 칠갑산관리팀장 신현성 주무관
○ 장곡로 훼손지 및 위험구간 정비공사(탐방환경 개선·정비사업) 착수		‘21.04.16.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 한양순 칠갑산관리팀장 신현성 주무관
○ 대둔산도립공원 탐방로 위험지역 정비 및 경관개선사업 시행결의		‘21.04.20.	이태윤 도립공원과장 백종성 대둔산관리팀장 서보람 주무관
○ 덕산도립공원 탐방환경 개선·정비사업 추진 - 덕산도립공원 탐방환경 개선·정비사업 및 감리용역 착수		‘21.04.26.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 손송현 주무관

<그간 주요 추진내용>
○ 2021년 자연환경보전·이용시설 조성사업(행정호) 시행결의	‘21.04.28.	이태윤 도립공원과장 백종성 대둔산관리팀장 서보람 주무관
○ 도립공원 주민지원사업 추진 - 덕산도립공원 화장실 설치사업 시행 결의	‘21.04.29.	이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 손송현 주무관
○ 도립공원 주민지원사업 추진 - 덕산도립공원 화장실 설치사업 착공	‘21.05.10.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 손송현 주무관
○ 대둔산도립공원 탐방로 위험지역 정비 및 경관개선사업 추진 - 사업 착공	‘21.05.17.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 백종성 대둔산관리팀장 서보람 주무관
○ 덕산도립공원 보전관리계획 의견수렴 계획 수립	‘21.05.26.	이태윤 도립공원과장 이정아 운영지원팀장 박은지 주무관 최종영 덕산관리팀장 손송현 주무관
○ 2021년 자연환경보전·이용시설 조성사업(행정호) 착공	‘21.05.31.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 백종성 대둔산관리팀장 서보람 주무관
○ 장곡로 훼손지 및 위험구간 정비공사(탐방환경 개선·정비사업) 설계변경	‘21.06.03.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 한양순 칠갑산관리팀장 신현성 주무관
○ 덕산도립공원 탐방환경 개선·정비사업 설계변경	‘21.06.14.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 손송현 주무관
○ 덕산도립공원 탐방환경 개선·정비사업 준공	‘21.06.18.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 손송현 주무관
○ 장곡로 훼손지 및 위험구간 정비공사(탐방환경 개선·정비사업) 준공	‘21.06.24.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 한양순 칠갑산관리팀장 신현성 주무관
○ 도립공원 주민지원사업 추진 - 덕산도립공원 화장실 설치사업 설계변경	‘21.06.25.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 손송현 주무관
○ 도립공원 주민지원사업 추진 - 덕산도립공원 화장실 설치사업 준공	‘21.07.08.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 고윤희 주무관
○ 대둔산도립공원 탐방로 위험지역 정비 및 경관개선사업 설계변경	‘21.07.22.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 백종성 대둔산관리팀장 서보람 주무관

<그간 주요 추진내용>
○ 덕산도립공원 보전관리계획 수립을 위한 주민설명회 개최 알림	‘21.07.26.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 이기세 운영지원팀장 손송현 주무관
○ 대둔산도립공원 탐방로 위험지역 정비 및 경관개선사업 설계변경 (2차)	‘21.08.17.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 백종성 대둔산관리팀장 서보람 주무관
○ 대둔산도립공원 탐방로 위험지역 정비 및 경관개선사업 준공	‘21.08.25.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 백종성 대둔산관리팀장 서보람 주무관
○ 덕산도립공원 탐방·주민환경 정비사업 추진계획	‘21.08.30.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 고윤희 주무관
○ 덕산도립공원 탐방·주민환경 정비사업 실시설계용역 시행결의	‘21.09.07.	이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 고윤희 주무관
○ 덕산도립공원 보전관리계획(안) 주민의견 검토 및 최종보고서 제출	‘21.09.13.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 이기세 운영지원팀장 손송현 주무관
○ 대둔산도립공원 자연환경보전·이용시설 조성사업 시행변경	‘21.09.13.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 백종성 대둔산관리팀장 서보람 주무관
○ 대둔산도립공원 자연환경보전·이용시설 조성사업 준공	‘21.09.14.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 백종성 대둔산관리팀장 서보람 주무관
○ 덕산도립공원 탐방·주민환경 정비사업 실시설계용역 착수	‘21.09.14.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 고윤희 주무관
○ 덕산도립공원 탐방·주민환경 정비사업 실시설계용역 완료	‘21.09.29.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 고윤희 주무관
○ 덕산도립공원 탐방·주민환경 정비사업 시행결의	‘21.10.01.	이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 고윤희 주무관
○ 덕산도립공원 탐방·주민환경 정비사업 착공	‘21.10.08.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 고윤희 주무관
○ 덕산도립공원 탐방·주민환경 정비사업 설계변경	‘21.11.01.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 강아영 주무관

<그간 주요 추진내용>
○ 덕산도립공원 탐방·주민환경 정비사업(2차) 추진계획	‘21.11.05.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 강아영 주무관
○ 덕산도립공원 탐방·주민환경 정비사업 준공	‘21.11.05.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 강아영 주무관
○ 덕산도립공원 탐방·주민환경 정비사업(2차) 시행결의	‘21.11.08.	이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 강아영 주무관
○ 덕산도립공원 탐방·주민환경 정비사업(2차) 착공	‘21.11.16.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 강아영 주무관
○ 덕산도립공원 탐방·주민환경 정비사업(2차) 준공	‘21.12.08.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 강아영 주무관
○ 2022년 덕산도립공원 탐방·주민 환경개선 정비사업 추진계획	‘21.12.30.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 강아영 주무관
○ 2022년 덕산도립공원 탐방·주민 환경개선 정비사업 실시설계용역 시행결의	‘22.01.04.	이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 강아영 주무관
○ 2022년 덕산도립공원 탐방·주민 환경개선 정비사업 실시설계용역 착수	‘22.01.11.	서도원 산림자원연구소장 이태윤 도립공원과장 최종영 덕산관리팀장 강아영 주무관